차량계 건설기계 작업계획서 작성 TEST_굴착기

상황 : 2019년 01월 03일 작업자 및 굴착기 운전원 최초 출근

1. 현장명 : 노량진역 청년주택 신축공사
2. 협력업체 : ㈜원우이앤씨
3. 조직 구성
도급- 강남건영㈜		현장소장 : 유준석부장 공사차장 : 김선민차장 안전과장 : 오세득과장
하도급- ㈜원우이앤씨		현장소장 : 박종철이사 공사부장 : 박종일부장 작업팀장 : 김복식팀장 작업팀원 : 이영복, 김수봉, 양종철 신 호 수 : 이경선
4. 사용기간 : 2019.01.03. ~ 2019.03.30.
5. 지형 : 평지
6. 지반종류 : 토사, 연암
7. 신호방법 : 무선
8. 위험반경내 출입금지 방안 : 칼라콘
9. 중량물 세부사항
품명	규격(㎜)			수량	비고
H형강	300 x 300 x 10,000			20본	940㎏/본당
“	300 x 300 x 8,000			10본	752㎏/본당
[참고사진]			☞운반작업거리 : 5m ☞줄걸이 적용사항 -슬링벨트(KS-100,5m) 2개 -샤클(3/8) 2개 -수평형클램프(HLC1HE) 2개 참고자료 별표*, 별표*, 별표*

차량계 건설기계 / 중량물 취급 작업계획서

[관련근거 ▷ 산업안전보건기준에 관한규칙 제38조]

건설기계명		현 장 명		작 성 일 자
제 조 사		가입보험기간		협 력 업 체
년식 / 규격		검사유효기간		협 력 소 장
형 식		사 용 기 간		작업지휘자
등 록 번 호		사 용 장 소		운전원	성명
등록업체명		근로자교육일			자격

□ 굴삭기 제원 및 성능

길이(전장)	㎜	높이(전고)	㎜	너비(폭)	㎜	총중량	㎏

주행방식	버킷용량		암의길이	붐의길이	최대굴삭깊이	최대덤프높이	최대인양능력
	평 적	산 적
	㎥	㎥	㎜	㎜	㎜	㎜	㎏

□ 굴삭기 운행 및 일반사항

지 형	□ 평지 □ 경사지( %)	지반종류
운행경로	도면 참조	신호방법	□수신호 □ 무선 □기타( )
위험반경내 출입금지 방안	□ 접근방지 윙카 □ 접근방지 로프 □ 접근방지 휀스 □ 칼라콘 □ 기타 ( )	제한속도	10km/h	□ 법적기준 □ 제조자 기준 ■ 자체 기준
신호수		총 작업량	H-BEAM : 30본

□ 중량물 세부사항(중량물 부재별 단위중량은 별도 첨부 – 자재반입송장 등)

중량물의 품 명	중량물의 크기(mm) 및 무게(㎏)					양중 횟수	중량물 형상					최대중량물
	W(가로)	L(세로)	H(높이)	∅(둘레)	중량(㎏)		중량물의 양중형태 선택
												무게(중량)	㎏
												양중횟수	회
						회	□	□		□
												운반 작업거리	m
						회
												굴삭기인양능력	㎏
							□	□		□
						회
										기타
												인양능력 판단
						회

□ 줄걸이 세부사항

와이어로프	직경	길이		파단하중 (D2÷20)			슬링벨트		폭	길이		인양하중						줄걸이안전하중		t
												수직형	초크형		바스킷형
	㎜	㎜		t					㎜	㎜		t	t		t			줄걸이 판단
줄걸이 재료 체결방법 및 세부사항
체결구 종류			규격 / 수량		하중/개당			줄걸이수		각도	체결구 종류			규격 / 수량		하중/개당			줄걸이수	각도
			/		ton/개당			줄						/		ton/개당			줄

□ 중량물 취급작업에 따른 안전대책

① 추락재해예방 안전대책
② 낙하재해예방 안전대책
③ 전도재해예방 안전대책
④ 협착재해예방 안전대책
⑤ 붕괴재해예방 안전대책

□ 굴착방법 및 순서, 토사반출방법

굴착방법 및 순서

1. 1차 터파기.

2. 우측1단 STRUT 설치.

3. 2차 터파기.

4. 우측2단 STRUT 설치.

5. 3차 터파기.

6. 우측3단, 중앙1단 STRUT 설치

7. 4차 터파기.

8. 우측4단, 중앙2단 STRUT 설치

9. 5차 터파기

10. 우측5단, 좌측1단, 중앙3단, STRUT, 복공설치

11. 6차 터파기

12. 우측6단, 좌측2단, 중앙4단 STRUT 설치

13. 7차 터파기

14. 우측7단, 좌측3단, 중앙5단 STRUT 설치

15. 굴착 완료

토사반출 방법
작업구간 굴삭기동선 덤프동선 복공판 ★ 작업지휘자 ● 신호수 ■ 가시설공

□ 근로자 안전교육 확인

차량계 건설기계 및 중량물 취급작업과 관련하여 작업지휘자로부터 작업순서 및 작업방법에 대한 안전교육을

받았으며, 작업지휘자의 지시에 따라 안전수칙을 준수하여 작업할 것을 서명합니다.

확 인 서 명	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

※ 안전관리자 검토의견

협력업체 소장		(서명)	공사담당자		(서명)	안전관리자		(서명)	현장소장		(서명)

※ 작성 Flow : 협력업체 작성 → 공사담당/안전관리자 검토

※ 첨부서류 : ■작업계획도(도면), □제원표, □인양능력표, □건설기계 등록·검사증, □면허증, □건설업기초안전교육이수증

□보험증권, □특수형태근로종사자교육이수증, □작업지휘자 지정서, □신호수 지정서

□ 작업계획도(도면)

○ 포함사항 - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
범 례	작업지휘자 ★, 운전원 ▲, 가시설공 ●, 신호수 ■

작업지휘자 지정서

장 비 명 :

업 체 명 :

성    명 :

귀하를 위 작업에 대하여 산업안전보건에 관한 규칙 제39조에 의한

작업지휘자로 지정하는바 작업계획서 내용을 숙지하고 작업계획에

따른 작업 및 안전한 작업이 되도록 지휘하여 주시기 바랍니다.

※ 작업지휘자 지정 대상작업

1. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다.

이하 같다)

2. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)

3. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의

최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업

4. 중량물의 취급작업

5. 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업

※ 작업지휘자 업무

1. 작업순서 및 그 순서 마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘한다.

2. 신호수(유도자)는 장비 운전자가 잘 볼 수 있고 통제할 수 있는 곳에 위치하였는지 확인한다.

3. 작업 장소는 충분한 공간 확보와 조명을 유지하고, 장애물이 없도록 한다.

4. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 통제한다.

5. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거한다.

6. 로프를 풀거나 덮개 벗기는 경우 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인 후 작업을 진행한다.

7. 기상 여건(눈,비)을 확인 후 기준에 따라 그 작업을 중지 및 재개한다.

위 작업지휘자 확인 :     (인)

2019년  01월  02일

노량진역 청년주택 신축공사 현장대리인 (인)

신호수 지정서

장 비 명 :

업 체 명 :

성    명 :

귀하를 위 작업에 대하여 산업안전보건에 관한 규칙 제40조에 의한

신호수로 지정하는바 신호수 업무의 내용을 숙지하고 작업계획에

따른 신호를 통한 작업이 되도록 지휘하여 주시기 바랍니다.

※ 신호수 지정 대상작업

1. 양중기를 사용하는 작업

2. 제171조 및 제172조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

3. 제200조제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업

4. 항타기 또는 항발기의 운전작업

5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업

6. 양화장치를 사용하는 작업

7. 제412조에 따라 유도자를 배치하는 작업

8. 입환작업

※ 신호수 업무

1. 차량계 하역운반기계 및 건설기계 등 작업중인 해당 장비에 접촉되어 부딪힐 위험이 있는

장소에 대한 출입통제 및 유도

2. 당해 기계의 전도 또는 전락 등의 방지조치에 대한 확인

3. 당해 기계의 운전자와 일정한 신호방법을 정하여 신호작업 수행

4. 관리감독자의 지도, 조언에 대한 협조

위 신호수 확인 :     (인)

2019년  01월  02일

노량진역 청년주택 신축공사 현장대리인 (인)

차량계 건설기계 / 중량물 취급 작업계획서

[관련근거 ▷ 산업안전보건기준에 관한규칙 제38조]

건설기계명	굴삭기	현 장 명	노량진2차 청년주택	작 성 일 자		2019.01.02.
제 조 사	VOLVO	가입보험기간	2018.11.06. ~ 2019.11.06.	협 력 업 체		㈜원우이엔씨
년식 / 규격	2018 / 14.06ton	검사유효기간	2018.11.06. ~ 2019.11.05.	협 력 소 장		김서호 부장
모 델	EW140E	사 용 기 간	2019.01.03. ~ 2019.03.30.	작업지휘자		박종일 부장
등 록 번 호	경기02더5334	사 용 장 소	노량진2차 청년주택 현장내	운전원	성명	안 항 식
등록업체명	㈜송림토목중기	근로자교육일	2019.01.03.		자격	건설기계조종사면허

□ 굴삭기 제원 및 성능

길이(전장)	7,555mm	높이(전고)	3,455mm	너비(폭)	2,500mm	자체중량	14.06ton

주행방식	버킷용량		선회속도	암의길이	붐의길이	최대굴삭깊이	최대덤프높이
	평 적	산 적
자주식(타이어식)	0.42m3	0.57m3	11rpm	2,100mm	4,400mm	4,757mm	5,765mm

□ 굴삭기 운행 및 일반사항

지 형	■ 평지 □ 경사지( %)	지반종류	토사, 연암
운행경로	도면 참조	신호방법	□수신호 ■ 무선 □기타( )
위험반경내 출입금지 방안	□ 접근방지 윙카 □ 접근방지 로프 □ 접근방지 휀스 ■ 칼라콘 □ 기타 ( )	제한속도	10km/h	□ 법적기준 □ 제조자 기준 ■ 자체 기준
신호수		총 작업량	토사외:4,900㎥ / H-BEAM:278본

□ 중량물 세부사항(중량물 부재별 단위중량은 별도 첨부 – 자재반입송장 등)

중량물의 품 명	중량물의 크기(mm) 및 무게(㎏)					양중 횟수	중량물 형상		H-BEAM
	W(가로)	L(세로)	H(높이)	∅(둘레)	중량(㎏)		중량물의 양중형태 선택
토사 외					0.57㎥	8,597회	■	□		□
H-BEAM	300	300	10,000		940㎏	278회
						회	□	□		■
										버킷
						회

최대중량물	H-BEAM
무게(중량)	940㎏
총 양중횟수	278회
운반작업거리	5m
굴삭기양중능력	9,260kgf
양중능력 판단	O.K

□ 중량물 취급작업에 따른 안전대책

① 추락재해예방 안전대책	고소작업시 안전벨트 생명줄 고정.
② 낙하재해예방 안전대책	- 가시설에 낙하물 방지망 설치.
③ 전도재해예방 안전대책	- 수시로 바닥 평탄작업 실시.
④ 협착재해예방 안전대책	장비 작업구간내 근로자 접근금지 조치.
⑤ 붕괴재해예방 안전대책	터파기 작업시 시방서 기준으로 소단형성.

□ 굴착방법 및 순서, 토사반출방법

굴착방법 및 순서

1. 1차 터파기.

2. 우측1단 STRUT 설치.

3. 2차 터파기.

4. 우측2단 STRUT 설치.

5. 3차 터파기.

6. 우측3단, 중앙1단 STRUT 설치

7. 4차 터파기.

8. 우측4단, 중앙2단 STRUT 설치

9. 5차 터파기

10. 우측5단, 좌측1단, 중앙3단, STRUT, 복공설치

11. 6차 터파기

12. 우측6단, 좌측2단, 중앙4단 STRUT 설치

13. 7차 터파기

14. 우측7단, 좌측3단, 중앙5단 STRUT 설치

15. 굴착 완료

토사반출 방법
작업구간 굴삭기동선 덤프동선 ★ 작업지휘자 ● 신호수 ■ 가시설공

□ 근로자 안전교육 확인

차량계 건설기계 및 중량물 취급작업과 관련하여 작업지휘자로부터 작업순서 및 작업방법에 대한 안전교육을

받았으며, 작업지휘자의 지시에 따라 안전수칙을 준수하여 작업할 것을 서명합니다.

확 인 서 명	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)
	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

※ 안전관리자 검토의견

협력업체 소장		(서명)	공사담당자		(서명)	안전관리자		(서명)	현장소장		(서명)

※ 작성 Flow : 협력업체 작성 → 공사담당/안전관리자 검토

※ 첨부서류 : ■작업계획도(도면), ■제원표, ■인양능력표, ■건설기계 등록·검사증, ■면허증, ■건설업기초안전교육이수증

■보험증권, ■특수형태근로종사자교육이수증, ■작업지휘자 지정서, ■신호수 지정서

□ 작업계획도(도면)

○ 포함사항 - 장비위치 및 작업진행 방향, 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 전도 방지대책, 유도자/작업자 위치, 지장물(전선등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역
범 례	작업지휘자 ★, 운전원 ▲, 가시설공 ●, 신호수 ■